(제331회-행정문화 제1차)한슬

한슬(제331회-행정문화 제1차)

2023년도 제2차 수시 공유재산관리계획안

의안 번호	121		제출년월일 : 2023. 4.
			제 출 자 : 부산광역시 부산진구청장

1. 제안이유

「공유재산 및 물품 관리법」제10조의2(공유재산의 관리계획), 같은 법 시행령 제7조(공유재산의 관리계획) 및「부산광역시 부산진구 공유재산관리 조례」제10조(공유재산의 관리계획)에 따라 의회의 의결을 얻고자 본안을 제출합니다.

2. 주요내용

❍ 취득재산                                             (단위 : ㎡, 백만원)

사 업 명	소재지	구분	면적	추정가격	취득시기	취득방법	주관부서
황령산레포츠공원 주차장 확충사업	전포동 산125번지	토지	449	12	2023.09월	매입	교육 체육과
	전포동 산36번지	공작물	800~1,000	2,988	2024.10월	신축

3. 2023년 제2차 수시 공유재산관리계획안【붙임1】

4. 황령산레포츠공원 주차장(전포동 산36번지) 건설 세부내역【붙임2】

【붙임1】

2023년 제2차 수시 공유재산관리계획안

□ 공유재산관리계획 총괄표

❍ 회계명: 일반회계

(단위 : 건, ㎡, 백만원)

구분			상반기			하반기			합계			비 고
			건수	면적	금액	건수	면적	금액	건수	면적	금액
취득	계	토지	1	449	12				1	449	12
		건물
		기타 (공작물)	1	800	2,988				1	800	2,988	공사비 등
	1.매입	토지	1	449	12				1	449	12
		건물
		기타 (공작물)	1	800	2,988				1	800	2,988	공사비 등

□ 취득대상 재산목록

❍ 회계명: 일반회계

(단위 : ㎡, 백만원)

연번	재산의 표시				추정가격 (예정가격)	취득시기	취득방법	비고 (소관부서)
	종류	지목	소재지	면적 (규모)
1	토지	구거	전포동 산125번지 (국유지)	449	12	2023.09월	매입	교육체육과
2	공작물	-	전포동 산36번지 (구유지)	800~1000 (2단3층)	2,988	2024.10월	신축

【붙임2】

황령산레포츠공원(전포동 산36번지 일원) 주차장 건설

□ 사업목적

❍ 황령산레포츠공원은 다수의 지역 주민이 이용하는 체육시설이나 부족한

주차시설로 인한 진출입로 불법주차 등의 문제로 차량 교행 불편 및

안전사고 위험에 노출되어 있음

❍ 특히, 산지에 위치한 지리적 여건으로 인해 대중교통을 통한 접근이

곤란하며 기존 체육시설 인프라의 충분한 활용과 시민들의 건강증진을

위해 주차시설 확충을 통한 시설 운영이 필요함

❍ 2022년 12월 황령산레포츠공원 주차장 확충사업으로 특별교부세 13억원이

확보됨에 따라 2023∼2024년 신속하게 공원 현대화사업을 추진하여

생활체육 활성화 및 구민 불편 해소를 추진하고자 함

□ 사업개요

❍  위    치 : 황령산레포츠공원 내(전포동 산36번지 일원)

❍ 규    모

▷ (토  지) 전포동 산125번지 일부

- 지  목 : 구거(용도폐지 후 지목변경 예정)

- 면  적 : 1,611㎡ 중 449㎡ 매입

- 소유자 : 국토교통부

▷ (공작물)

- 2단 3층(주차면수 약45면, 지붕층 풋살장, 족구장 조성계획)

- 바닥면적 : 800~1,000㎡

- 연면적 : 2,400~3,000㎡

❍ 사업기간 : 2023. 1월 ~ 2024. 10월

❍ 사 업 비 : 3,000백만원

□ 재원확보 방안

(단위 : 백만원)

총사업비	국 비	시 비	구 비	비 고
3,000	1,300	500	1,200	□국비: 특별교부세 (2022년 기확보) □시비: 특별조정교부금 (2023년 교부 결정) □구비: 1차 추경 편성 예정

□ 추진상황 및 향후계획

❍ 2023. 2월 : 황령산레포츠공원 현대화사업 추진 기본계획 수립

❍ 2023. 2~4월 : 황령산레포츠공원 현대화사업 추진 사전절차 진행

- 지방재정투자심사, 공유재산심의회 심의 및 공유재산관리계획안 제출

- 황령산유원지 조성계획 결정(변경)안 심의요청(市공원정책과)

❍ 2023. 5월 : 제1회 추가경정예산 사업비 편성

❍ 2023. 6~8월 : 실시설계 용역 준공

❍ 2023. 9월 ~ 2024. 10월 : 공사 착공 및 준공(주차장 운영)

□ 위치도 및 현장사진(평면도 포함) : 붙임

붙 임

위치도 및 현장사진

위치도		전포동 산36번지 일원

현장사진

매입 예정 토지(449㎡)

주차장 예정 부지(800~1000㎡)

주차장 배치(평면)도

□ 1층 주차면 수: 22면(예상)

□ 2층 주차면 수: 23면(예상)

□ 지붕: 풋살장, 족구장 조성계획(예상)